붙임 5

운용부서

등록번호

문서분류

업무기준

환경품질처

QMS-0103

KOREA

EXPRESSWAY

CORPORATION

2008.  7. 25   제    정

2009.  9.  3   1차 개정

2009. 11. 23   2차 개정

2011.  3. 29   3차 개정

2012.  5. 03   4차 개정

2013. 10. 31   5차 개정

2015. 12. 24   6차 개정

공급원 승인 실무 매뉴얼

제 1 장  총      칙

제1조(목적)

본 매뉴얼은 공급원 승인 대상자재의 효율적인 품질관리방안을 수립하여 부적합 자재 사용을 사전에 예방하고자 시행하고 있는 ‘공급원 승인 업무’에 대하여 품질관리부서, 감독원(건설사업관리기술자), 시공자 각각의 업무내용과 책임범위를 규정함으로써 업무효율을 증진하는데 그 목적이 있다.

제2조(적용범위)

본 매뉴얼은 고속도로 공사에 소요되는 주요자재(지급자재 제외)의 ‘공급원 승인 업무’에 대하여 적용한다.

제3조(관련근거)

① 건설기술진흥법 제55조 (건설공사의 품질관리)

② 건설기술진흥법 제57조 (건설자재․부재의 품질확보 등)

③ 건설공사 품질관리 업무지침 제32조(국토교통부 고시, 2015년)

④ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제57조(국토교통부 고시, 2015년)

⑤ 고속도로공사 전문시방서 (제3장 자재관리 : 한국도로공사, 2012년)

제4조(용어의 정의)

① 공급원 승인

자재 반입 전 품질 및 규격의 시방기준 적합여부를 감독원(건설사업관리기술자)이 검토․확인하고, 소속기관장의 승인을 득한 후에 자재가 납품되도록 하는 제도

② 자재사용보고

기 공급원 승인되어 사용 중인 자재를 별도의 승인절차 없이 사용보고 만으로 사용할 수 있도록 한 제도, 사용보고 후 제반 관리는 공급원 승인과 동일

③ 공급회사 변경 보고

기 공급원 승인(자재사용보고)되어 사용 중인 자재의 공급업체가 변경되었을 시 별도의 승인절차 없이 변경보고 만으로 해당자재를 사용할 수 있도록 한 제도, 변경보고 후 제반 관리는 공급원 승인과 동일

④ 품질 인증자재

「산업표준화법」에 따른 한국산업표준인증제품 또는「주택법」등 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인증받은 재료
단, “특별관리 대상자재”는 품질인증자재에서 제외

⑤ 품질인증 이외의 자재

④항에 해당되지 않는 자재

⑥ 특별관리 대상자재 (건설기술진흥법 시행령 제95조)

건설기술진흥법 제57조 제1항의 “대통령령으로 정하는 건설자재·부재”(ⓐ∼ⓕ) 등 주요자재(ⓖ∼ⓘ)
ⓐ레디믹스트 콘크리트    ⓑ아스팔트 콘크리트    ⓒ바닷모래    ⓓ부순골재
ⓔ철근 및 H형강 및 두께 6mm 이상의 건설용 강판(가시설용 제외)
ⓕ순환골재 (건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제2조 제7호)    ⓖ양생재
ⓗ혼화재료(혼화제, 혼화재)    ⓘ당해 계약에 품질보증의 이행이 명시되어 있는 건설자재

⑦ 외산자재

국산자재 이외의 자재로 외국에서 생산되는 자재
단, 외산자재 중 ④항에 해당하는 자재는 품질인증자재로 간주

⑧ 자재 군별 분류

자재 품질의 변동성에 따라 자재를 A~C 및 기타 군으로 분류하여 관리하는 것, 세부내용은 [별표 #3]을 따름

⑨ 사전 주요 품질시험 항목

품질 변동이 우려되는 주요자재(B군)에 대해 공급원 승인 신청 전에 감독원(건설사업관리기술자)이 확인해야 하는 품질시험 항목, 세부내용은 [별표 #4]에 따름

⑩ 공급원 사전 체크시트

공급원 승인 요청 및 자재사용보고시 자재의 적정여부를 사전에 검토 가능토록 확인사항을 나타낸 Sheet [별지 제3호 서식]

⑪ 품질시험 성적 적정여부 확인체계

공급원 승인시 품질시험성적 적정성 여부를 확인하는 체계, 세부내용은 [별표 #5]에 따름

⑫ 표준제품

완제품 시험 대상자재를 생산하는 업체의 생산능력 및 품질적정성을 확인하기 위한 설계규격 이상의 기성제품

제5조(책임사항)

① 건설사업단 및 지역본부의 장

건설사업단 및 지역본부의 장은 공급원 승인요청서를 최종 확인하여 승인 여부를 통보하여야 하며, 시공자가 적절한 품질의 자재를 사용토록 지도, 관리하여야 한다.

② 품질관리부서

1. 품질관리부서는 현장에 반입되는 공사용 재료의 공급원 승인요청에 대하여 검토 및 확인할 책임이 있다.

2. 품질관리부서는 공급원 승인요청에 대하여 성적서 위․변조 여부 등 품질시험성적 적정성 여부를 확인 하여야 한다.

3. 품질관리부서의 장은 “공급원 승인” 및 “자재사용보고” 현황을 관리하여야 한다

4. 품질관리부서는 공급원 승인된 자재의 품질관리를 위하여 수시로 확인시험을 실시토록 시공자에게 지시하여야 한다.

5. 품질관리부서는 품질부적격 자재 발생시 [별표 #1]에 따라 관리하여야 한다.
(품질인증자재의 경우 2회 불합격시 인증관련기관에 통보)

6. 품질관리부서는 반입되어 사용 중인 자재를 임의로 샘플링하여 품질 변동 여부에 대한 공인기관 시험을 시행할 수 있고, 그 비용은 우리 공사가 부담한다.

③ 감독원(건설사업관리기술자)

1. 감독원(건설사업관리기술자)은 시공자로 하여금 공급원 승인요청서를 자재반입 15일 전까지 제출토록 하며, 시공자가 제출한 공급원 승인요청서의 적정성 검토 및 이행여부를 확인하고, 검토의견서를 첨부하여 품질관리부서에 제출하여야 한다.

2. 감독원(건설사업관리기술자)은 공사목적물을 구성하는 주요기계, 설비, 제조품, 자재 등의 주요 기자재가 공급원 승인을 받은 후 현장에 반입되면, 시공자로부터 송장 원본을 제출받아 확인하여야 한다.

3. 감독원(건설사업관리기술자)은 시공자로 하여금 공정계획에 의거 사전에 주요자재 수급 계획을 수립하여 자재가 적기에 현장에 반입되도록 조치하여야 할 책임이 있다.

4. 감독원(건설사업관리기술자)은 시공자가 현장에 반입 또는 사용하고 있는 주요자재에 대하여 최초 반입시 품질시험을 주관하고, 시험빈도에 따른 품질시험이 적정하게 시행되고 있는지 확인하여야 한다.
또한, 외부의뢰 품질시험시 감독원(건설사업관리기술자)이 주관하여 의뢰를 실시하여야 한다.

5. 감독원(건설사업관리기술자)은 반입되어 사용 중인 자재를 임의로 샘플링하여 품질 변동 여부에 대한 공인기관 시험을 시행할 수 있고, 그 비용은 우리 공사가 부담한다.

④ 시공자

1. 시공자는 공정계획에 의거 사전에 주요자재 수급계획을 수립하여 자재가 적기에 현장에 반입되도록 하여야 한다.

2. 시공자는 공정계획에 의거 사전에 주요자재에 대한 공급원 승인신청서를 작성, 자재반입 15일 전까지 감독원(건설사업관리기술자)에게 제출하여야 한다.
단, 공급원 승인 후 최초 반입시험(검사)으로 인해 공정추진에 차질이 없도록 시험(검사) 소요기간을 고려하여 승인요청을 하여야 한다.

3. 시공자는 공사목적물을 구성하는 주요기계, 설비, 제조품, 자재 등의 주요 기자재가 공급원 승인을 받은 후 현장에 반입되면, 송장 사본을 감독원(건설사업관리기술자)에게 제출하여야 한다.

4. 시공자는 현장에 반입 또는 사용하는 자재에 대하여 최초 반입시 및 시험빈도에 따른 품질시험을 감독원(건설사업관리기술자)의 입회하에 실시하여야 한다.
또한, 외부의뢰 품질시험을 실시할 경우 감독원(건설사업관리기술자)이 주관하여 의뢰할 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

제 2 장  공급원 승인 일반사항

제6조(일반사항)

① 일반사항

1. ‘시공자’는 ‘감독원(건설사업관리기술자)’에게 자재 반입 15일 전까지 자재명, 규격, 제조사, 공급사, 품질인증여부 등을 포함하여 “공급원 승인”을 요청하거나,
[별지 제1호 서식]을 이용하여 “자재사용보고”를 하여야 한다.
단, 공사 목적물에 사용되는 자재가 아닌 경우에는 감독원(건설사업관리기술자)과 협의하여 “공급원 승인” 또는 “자재사용보고”를 하지 않고 사용할 수 있다.

2. “자재사용보고”는 우리 공사의 공급원 승인을 득한 문서를 근거로 하여야 한다.

3. ‘감독원(건설사업관리기술자)‘은 ’시공자‘가 제출한 “공급원 승인” 요청서류(“자재사용보고” 서류)를 5일 이내에 검토하여 이를 ’품질관리부서‘에 감독원 검토 의견서[별지 제4호 서식]와 함께 제출해야 하며,
”자재사용보고” 검토시 해당자재의 공급원 승인 후 품질기준 변경 및 추가사항에 대하여 품질시험 합격 여부를 확인하여야 한다.

4. ‘품질관리부서’는 ‘감독원(건설사업관리기술자)’이 검토·확인 후 제출한 “공급원 승인” 요청서류(“자재사용보고” 서류)를 검토․확인하고 ‘건설사업단 또는 지역본부의 장’은 자재명, 규격, 제조사, 공급사, 유효기간 등을 명시하여 7일 이내에 승인 여부를 통보하여야 한다.
단, 품질시험 성적 적정성 확인시 데이터망이 아닌 서면에 의한 직접 확인이 필요한 경우는 소요시간 만큼 승인기간을 연장할 수 있다.

5. “공급원 승인” 유효기간은 승인일로부터 해당 공구의 준공 시까지를 원칙으로 하며, 품질기준이 변경되어 승인시의 시험결과가 변경기준에 만족하지 못하는 경우 자동 만료된다. 또한, “공급원 승인” 자재의 유효기간 내에서 “자재사용보고”가 가능하고, “자재사용보고”후 해당자재를 사용할 수 있는 유효기간은 “자재사용보고”를 실시한 공구의 준공기한까지로 한다.

6. 기존에 사용하고 있던 자재의 공급회사가 변경 된 경우 [별지 제2호 서식]을 이용하여 ‘공급회사 변경 보고’를 하여야 한다.

7. “특별관리 대상자재” 중 아스팔트 콘크리트는 공급원 승인 후 6개월 이상 경과시 확인 배합을 수행하여 기존 결과와 비교하여 적정여부 확인 후 재승인을 받아야 한다.
또한, 공급원 승인시 ‘도로포장 전문화 과정’ 교육과 ‘포장 기능원’ 교육 이수 여부를 확인하여야 한다.

8. “외산자재”를 사용하는 경우 다음의 사항에 특히 유의하여야 한다.

가. “외산자재”는 “공급원 승인”에 의해서만 사용 가능(“자재사용보고” 불가)

나. 국내 품질기준을 적용하되 기준이 전무한 경우, 감독원(건설사업관리기술자) 승인 하에 “외산자재” 생산국가 품질기준 준용 가능

9. 가설기자재(안전인증 자재, 콘크리트 교량 가설용 동바리, 주요 가시설용 H형강, 가설교량용 형강자재 등)를 사용하는 경우에는 다음의 사항을 따른다.

가. 신규자재 사용 시에는 “공급원 승인”을 득한 후 사용하여야 한다.

나. 재사용 자재를 사용할 시에는 ‘건설현장 가설기자재 관리기준 (건설계획처-2632, 2009.09.01)’을 따른다.

10. “공급원 승인” 요청 대상자재가 [별표 #3] 자재 군별 분류에 따라 ‘B군’에 해당될 경우 시공자는 [별표 #4] 사전 주요 품질 시험항목에 따라 시험을 시행․확인하여야 하며, 샘플링은 감독원(건설사업관리기술자)이 직접 하여야 한다.
단, 화학 혼화제의 사전 주요 품질시험 시에는 반드시 현장 골재를 사용하여야 하고, 사전 주요 품질시험 이외의 항목은 ‘공급자’가 제출하는 시험성적서로 확인한다.

11. ‘시공자’는 ‘B군’자재 중 화학혼화제(AE제, 감수제, AE감수제, 고성능AE감수제, 고성능 감수제, 유동화제)를 “자재사용보고” 할 경우 “공급원 승인” 요청시와 마찬가지로 각 공구별 현장 골재를 이용하여 사전 주요 품질시험을 시행하여야 하며,
그 결과를 자재사용보고서에 첨부하여야 한다.
또한, ‘감독원(건설사업관리기술자)’은 현장 시험이 가능한 항목에 대해서는 직접 입회하여야 한다.

12. ‘시공자’는 ‘B군’자재 중 화학혼화제(AE제, 감수제, AE감수제, 고성능AE감수제, 고성능 감수제, 유동화제)를 “공급원 승인” 후 최초 입수시의 시험결과를 기준으로 매 반입시마다 간이시험(비중, 고형분)을 시행하여야 한다.
단, 간이시험 불합격시에는 공인기관 시험결과에 따라 조치하여야 하며, ‘감독원’은 본 사항에 대해 확인하여야 한다.

13. “공급원 승인” 요청 대상 자재가 [별표 #3] 자재 군별 분류에 따라 ‘C군’에 해당될 경우 ‘시공자’는 시공계획 도면과 자재 규격, 성능이 포함된 시공계획서를 ‘감독원(건설사업관리기술자)’에게 제출․검토를 받고, 공인기관 시험을 통해 자재 규격, 성능 등을 확인하여야 한다. ‘감독원’은 ‘시공자’가 제출한 시공계획서를 검토․확인하고 “공급원 승인” 후 자재가 반입될 때에는 시공계획서와 동일한 자재인지 확인하여야 한다.

14. ‘C군’자재 중 일체형 탄성받침의 경우 ‘시공자’는 “공급원 승인” 요청시 표준제품에 대한 공인시험기관 성적서를 제출할 수 있다.
단, 이러한 경우 해당자재 반입 전 최초 품질관리시험을 시행하여 성능을 확인 한 후 반입하여야 한다.

15. ‘C군’자재 중 프리캐스트 콘크리트 패널의 경우 “공급원 승인” 요청시 ‘시공자’는  완제품에 대한 공인시험 성적서(균열, 처짐)를 제출하여야 한다.

② 구비서류 주1)

1. 공급원 승인 요청시 서류

구 분	관 련 서 류
품질인증자재 (KS 자재 등) ※ 특별관리 대상자재 제외	ⓐ-1 최근 12개월 이내의 국․공립시험기관 또는 건설기술용역업자(품질검사)주2) 시험성적서, ⓐ-2 제조회사의 최근 3개월 이내의 자체시험 성적서 단, 제조회사가 국․공립시험기관 또는 건설기술용역업자(품질검사)로 등록된 시험실을 보유하고 발행한 시험성적서의 경우 공인기관 시험성적서로 인정 ⓑ 품질인증(KS) 표시증 및 인증서 사본 ⓒ 사업자 등록증 ⓓ 사전 체크시트 ⓔ 시험성적서 적정여부 확인서류
품질인증 이외의 자재 및 특별관리 대상자재주3)	ⓐ 최근 6개월 이내의 국․공립시험기관 또는 건설기술용역업자(품질검사) 시험성적서 단, 시험기간이 장시간 소요주4) 시험항목에 대하여는 최근 12개월 이내 국․공립시험기관 또는 건설기술용역업자(품질검사) 시험성적서 인정 및 우리공사 방침에 의해 별도의 시험성적서 인정기준을 규정하는 경우 방침 규정 적용 ⓑ 사업자 등록증 ⓒ 사전 체크시트 ⓓ 시험성적서 적정여부 확인서류
외산자재	ⓐ 최근 6개월 이내의 국․공립시험기관 또는 건설기술용역업자(품질검사) 시험성적서 단, 국내 시험이 불가능한 경우 자재 생산국가의 공인시험기관 또는 국제 공인시험기관의 6개월 이내 시험성적서 ⓑ 사업자 등록증(공급회사분) ⓒ 사전 체크시트 ⓓ 시험성적서 적정여부 확인서류
- 단, 시험성적서는 시료명, 시료채취 장소, 성과 이용목적 등이 명확하게 표기되어야 한다. ․시료명 : 시험 대상 자재의 재질, 규격, 성능 등을 명기 ☞ 재질 : 시료의 화학성분, 재질특성 등 ☞ 규격 : 가로×세로×두께, 연장, 폭 등 ☞ 성능 : 하중등급, 내진등급 등 ․시료채취 장소 : 구체적 명기 ․성과 이용목적 ☞ 사전 품질시험용 : 사전 품질시험 확인 자재 외부시험 의뢰시 ☞ 품질관리용 : 시공사 품질관리 시험항목 외부시험 의뢰시 ☞ 공급원 승인용(제조 또는 공급업체 품질관리용 포함) : 공급원 승인 요청시 - 단, 국산자재 중 국내 시험이 불가능하여 해외기관의 시험성적서를 제출하는 경우 한국인정기구(KOLAS)와 상호인정협정(MRA)을 체결한 해외 각 국의 인정기구주5)에 등록된 시험기관에서 발행한 6개월 이내 시험성적서 - 국내․외 공인시험기관 시험이 불가능할 경우 감독원(건설사업관리기술자) 입회한 자체시험 성적서 또는 품질보증서 또는 자재사용실적서 등

주1) 구비서류가 사본일 경우는 감독원(건설사업관리기술자)이 원본대조 후 현장대리인의 원본대조필 서명ㆍ날인이 있어야 한다.

주2) 건설기술진흥법 시행령 제97조 1항에 의해 대통령령이 정하는 국․공립 시험기관 또는 시․도지사*에서 등록증이 발급된(매년 국토교통부 장관에게 건설기술진흥법 시행령 제97조 2항에 의해 ‘품질검사에 사용되는 장비ㆍ기술인력의 현황 등’을 제출한) 건설기술용역업자(품질검사)
* 시․도지사 : 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사

⇒ 국․공립시험기관 또는 건설기술용역업자(품질검사)에서 시험할 수 없는 경우에는 감독원(건설사업관리기술자)이 입회하여 실시한 시험성적서로 갈음할 수 있다.

주3) 특별관리 대상자재 중 레미콘 및 아스콘은 총설계량이 소량(레미콘 1,000㎥ 미만, 아스콘 3,000ton 미만)이며 품질인증자재인 경우 12개월 이내 공인기관 시험성적서 인정

⇒ 특별관리 대상자재 List

· 레미콘, 아스콘, 바닷모래, 부순골재, 철근 및 H형강(가시설용 제외), 순환골재

· 양생재, 혼화제(AE제, 감수제, AE감수제, 고성능 AE감수제, 고성능 감수제, 유동화제, 수중 불분리성 혼화제, 팽창재, 무수축재, 급결제), 혼화재(플라이애시, 고로슬래그, 실리카퓸)

· 당해 계약에 품질보증의 이행이 명시되어 있는 건설자재

주4) 장시간 시험기간은 KS 등 시험규정에서 시험에 소요되는 기간이 60일 이상 요구되는 시험항목으로 규정한다.

주5) ILAC(국제시험기관인정협력체 : www.ilac.org) 및 APLAC(아시아태평양시험기관인정협력체 : www.aplac.org)에서 해외 국가별 인정기구 조회 가능

2. 자재 사용보고 시 서류

구 분	관 련 서 류
o 품질인증자재 o 품질인증 이외의 자재 o 특별관리 대상자재	별지 1호 서식(자재사용보고 양식), 승인문서 사본 1부 별지 3호 공급원 사전체크시트

③ 공급원 승인을 요청하여야 할 대상은 별표 #2와 같다

④ 공급원 승인 처리절차

체크시트 활용 사전확인

시공자

◦ 공급원 승인요청서 또는 자재사용보고서 작성, 제출

* 사전체크시트 첨부

◦ 기한 : 자재반입 15일전

* 단, B, C군 자재는 사전품질시험/확인 후 공급원 승인요청

➂ 서류제출

➃ 승인여부 통보

(접수 후 7일 이내)

감독원

(건설사업관리기술자)

◦ 사용자재의 적정성 검토

* 감독원 검토 의견서 첨부

◦ 기한 : 시공자 서류제출 후 5일 이내

품질관리부서

◦ 사용자재의 적정성 검토 및 확인

◦ 품질시험 성적 적정성 확인

➀

➁

부  칙

이 업무기준은 2015. 12. 24 부로 시행한다.

[별표 #1] 품질부적격 자재 조치절차 및 제재내용

[별표 #2] 공급원 승인 대상 목록

[별표 #3] 자재 군별 분류

[별표 #4] 사전 주요 품질시험 항목

[별표 #5] 품질시험 성적 적정성 확인체계

[별지 제1호 서식] 자재사용보고

[별지 제2호 서식] 공급회사 변경 보고

[별지 제3호 서식] 공급원 사전 체크시트

[별지 제4호 서식] 감독원 검토 의견서

[별표 #1]

품질부적격 자재 조치절차 및 제재내용

◉ 품질부적격 자재의 조치절차

※ 본사 또는 외부점검 시 품질부적격 자재의 조치는 다음사항 준용

①품질시험 결과 기준미달 (1회 불합격1))	→	②해당현장 해당자재 전량반출 및 잠정공급 중지	→	③벌점 부과 및 우리공사 전기관 통보	→	④품질확인 재시험2) 실시			불합격 →	⑤-2 해당자재 공급중지3) (우리공사 전기관 통보)
해당현장		해당현장		사업단 및 지역본부		해당현장				해당현장
						합 격	↓		1년이내 재불합격시 (2회 불합격)		↓
						⑤-1 해당자재 공급재개				⑥공급원 승인 취소 및 영구 퇴출 (납품업체,제조업체)
						해당현장				전 현장

1) 1회 불합격 : ①∼⑤까지의 과정 (단, 1회 불합격 판정 시점은 ①의 시점으로 한다)

2) 품질확인 재시험 : 해당자재 신규 입고 예정자재에 대하여 시행

3) 해당자재 공급중지 : 1회 불합격 자재의 품질확인 재시험결과가 기준 미달시 해당현장 영구 공급중지

◉ 품질부적격 자재의 제재내용

※ 품질부적격 자재 : 불합격 자재, 판정 시점 및 업체에 대하여 현황관리

구 분	용 어 정 의	제재 내용
1회 불합격	① 품질시험결과 기준 미달시 (1회 불합격)	◦ 불합격자재 전량반출 및 해당현장 잠정공급 중지 (우리공사 전기관 통보)
	➄-2 품질확인 재시험결과 기준 미달시	◦ 불합격자재 전량반출 및 해당현장 영구공급 중지 (우리공사 전기관 통보)
2회 불합격	◦ 1회 불합격 판정을 받은 자재가 최초 불합격 판정을 받은 시점으로부터 1년 이내에 다시 불합격 판정을 받은 경우 ※ 불합격 판정을 받은 자재를 사용하는 공구가 1회 불합격 판정을 받은 공구와 동일한 공구가 아니어도 자재가 동일할 경우 2회 불합격으로 누계 산정	◦ 공급원 승인 취소 및 영구 퇴출 (동일자재를 사용하는 우리공사 전 현장) ◦ 품질인증자재(KS자재)가 2회 불합격시 품질인증 관련기관에 불합격 내용 통보

※ 레미콘 및 아스콘의 경우 ‘건설공사 품질관리 업무지침’ [별지 제8호, 제9호]에 따라 점검을 실시하여 그 결과에 따라 자재공급 일시중단, 자재공급원 승인 취소 등 적정한 조치를 취해야 함

※ 품질시험 결과 기준 미달시 벌점부과는 관련법령(건설기술진흥법 제53조)에 의거 조치

※ 품질시험성적서 위․변조 사례 발생시 시공사 부정당업자(국가계약법 시행규칙 [별표2]에 의거) 제재

※ ‘특별관리 대상자재’ 중 건설기술진흥법 제57조 제1항의 ‘대통령령으로 정하는 건설자재·부재’의 품질확인결과 건설공사에 사용하는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장에게 시정명령 등 필요한 조치를 하도록 요청할 수 있다.【건설기술진흥법 제57조 ➃항】

[별표 #2]

공급원 승인 대상 목록

구 분	자 재 명
소 계	216종
공 통 (10)	시멘트, 철근 및 H형강, 레미콘, 구입 골재, 기계적 철근이음(커플러), 라텍스, 스크리닝스, 혼합수, 순환골재, 마이크로시멘트 등
혼화재료 (19)	AE제, 감수제, AE감수제, 고성능 AE감수제, 고성능 감수제, 유동화제, 수중 불분리성 혼화제, 팽창재, 섬유보강재, 무수축재, 플라이애시, 고로슬래그, 무수축콘크리트, 급결제, 실리카퓸, PSC그라우트, 콘크리트 양생재, 수경성 시멘트 무수축 그라우트, 철근콘크리트용 방청제 등
토 공 용 (25)	부직포(토공용, 연약지반용), PP매트, PE매트, 보강토 옹벽 전면판 및 보강재료, EPS블록, 에폭시 피복철근, 다발관, 수평천연섬유배수재, 록볼트(비탈면보강용), FRP 파이프, 라이너 스크류너트, 엔쏘일, 강관파이프, H형강 말뚝, PEM PANEL, 섬유거푸집, 매트릭스옹벽, 이중코어수평배수재, 영구 앵커, 마이크로파일, GSB NUT, Coupling NUT, 난연시트, 연직배수공, 다짐말뚝공(모래, 쇄석) 등
배수공용 (26)	부직포(맹암거용), 유공관, PVC관, 원심력 철근콘크리트관, 플륨관, 벤치플륨관, 스파이럴 심골게이트관, VR관, 반월관, 철선, 지수판, 파형강판, 수팽창 지수재, PE배수구, 드레인보드, 스틸그레이팅, 실런트, 도로종배수용강관, PC암거, HDPE유공관, PC측구, 조인트필러, 단독콘, PVC 2중벽관, 도복장강관, 선배수시설 등
교량공용 (38)	말뚝(RC말뚝, PSC말뚝, PHC말뚝, 강관말뚝 등), PS강선, PS강연선, PS강봉, 리벳, 쉬스관(Duct), 정착구(Trumpet, Head), PC콘(Wedge), 강재, 강교용 방청도료, 고장력 볼트, 교면방수재, 교량받침, 교량신축이음, 신구콘크리트 접착제, 용접봉, 교량 집수구 및 배수관, 에폭시수지, 교량점검시설, 강가로보, PC가로보, 스터드볼트, 콘크리트 표면보호재료, 프리캐스트 콘크리트패널, 솔플레이트, 타르페이퍼, 말뚝 두부보강재, 복합말뚝결합구, 지압판(Anchor Plate), 육각볼트 및 너트, 방풍판, ICP말뚝, PWS케이블, Bar Coupler, 지압판(Tech Span), 헤드앵커(Tech Span), WPS복합방수시트, 아이볼트 등
터널공용 (21)	와이어 메쉬, 록볼트, 강지보재, 부직포(터널용), 방수쉬트, 타일, 레진, 강섬유, 내오염도장, 타일시멘트, 강관다단파이프, 숏크리트, 시멘트모르타르, 방수층보호재, 액상규산소다, FRP파이프, 철근지지용 방수앵커, 튜브형 강관록볼트, 포어폴링 파이프, 고착제, GFRP록볼트, 기타 터널 지보재 등
포장공용 (17)	분리막, 다웰바, 줄눈재료, 채움재, 역청재(AP, 유화아스팔트, 블론아스팔트, SMA 등), 프라이머, 아스콘공장, 고착제, 교면포장재료, 부분단면보수재료, PVA섬유, 절삭덧씌우기용 성형줄눈재, 재생아스콘, 석회석분, 상온형 아스콘, 방수용 아스팔트, 방수재료 점착체 등 ※ 콘크리트계 교면포장 각 공법별 시공지침에 명시된 자재
부대공용 (32)	방음판, 표지판, 부대공용 기초볼트 및 너트(와셔포함), 반사지, 현광방지시설, 시선유도시설, 가드레일, 가드휀스, 돌망태, 낙석방책, 낙석방지망, 낙석방지울타리, 교대보호블럭, 호안블럭, 경계블럭, 보차도용 인터로킹 블럭, 노면표시용 도료, 도로표지 도료용 유리알, 페인트류, 방음벽 커플러, 식생기반재, 야생동물 유도울타리, 방풍벽, 코아네트, 식생매트, 가설방음판, 와이어로프, 강재방호책, 그린백블록, 그린백핀, 토석류방호책, 건축공사용[전기공사용, 설비공사용, 통신공사용, 조경공사용] 자재류, 비탈면녹화용 종자 등
가설기자재 (신규자재) (26)	[안전인증자재] 파이프 서포트, 강관틀 비계용 부재(주틀, 교차가새, 띠장틀), 작업대, 이동식 비계용 부재(주특 및 각륜, 난간틀), 벽연결용 철물, 주틀의 연결핀, 강관조인트, 클램프, 조절형 받침철물, 수직보호망, 안전난간기둥, 통로용 작업발판, 철골용 클램프, 안전방망, 피벗형 받침철물, 선반지주, 단관비계용 강관, 고정형 받침철물, 달비계용 부재(달기체인, 달기틀), 방호선반, 엘리베이터 개구부용 난간틀, 측벽용 브래킷 콘크리트 교량 가설용 동바리(조립형, 강관틀, 강재, 혼합형), 가설교량용 형강자재, 복공판 주요 가시설용 H형강[교량 동바리 가시설용, 흙막이(굴착고 10m이상) 가시설용, 기타 감독원이 특히 안전에 중요하다고 판단한 가시설용] ※ 재사용 가설 기자자재는 ‘건설현장 가설기자재 관리기준(건설계획처-2632, 2009.09.01)’을 따른다.
기 타(2)	계측기기(터널, 연약지반), 풍향풍속계 등 기타 고속도로 공사시 기능 및 품질상 중요하다고 판단되는 자재

※ 공급원 승인 제도 개선방안(품질환경처-4255,2016.11.30)참고

[별표 #3]

자재 군별 분류

구 분	내 용	주 요 해 당 자 재
A군	자재 특성상 품질 변동 요인이 적은 자재	말뚝(RC말뚝, PSC말뚝, PHC말뚝, 강관말뚝 등)
		형강(H형강 제외), 강재, PS강선, PS강연선, PS강봉, 리벳, 쉬스관(Duct), PC콘(Wedge), 고장력 볼트, 용접봉, 록볼트, 강지보재, 강섬유, 기타 터널 지보재, 스틸그레이팅, 교량 집수구 및 배수관, 스파이럴 심골게이트관, 철선, 와이어메쉬, 스크리닝스, 록볼트(비탈면보강용), FRP파이프, 실런트, 강가로보, PC가로보, 교면포장재료, 부분단면 보수재료, 스터드볼트, 부대공용 기초볼트 및 너트(와셔포함), 정착구(Trumpet, Head), 강관다단파이프, 타일시멘트, 에폭시 피복철근
		유공관, PVC관, 원심력 철근콘크리트관, 플륨관, 벤치플륨관, VR관, 반월관, 지수판, 파형강판, 수팽창 지수재, PE배수구, 드레인보드, 다발관
		부직포(토공용, 연약지반용, 맹암거용, 터널용), PP매트, PE매트, EPS블록, 섬유보강재, 강교용 방청도료
		시멘트, 무수축콘크리트, PSC그라우트, 수경성 시멘트 무수축 그라우트
		역청재(AP 및 개질제, 유화아스팔트, 블론아스팔트, SMA 등), 채움재, 프라이머, 줄눈재료(실리콘 실런트 제외), 절삭덧씌우기용 성형줄눈재
		교면방수재, 신구콘크리트 접착제, 내오염도장재, 분리막, 노면 표시용 도료, 페인트류, 라텍스, 레진, 타일
B군	➀ 화학성분, 제조공정상 품질변동요인이 크고, 내구성에 미치는 영향이 큰 자재 ➁ 저품질 자재 반입사례가 있는 자재 (B군)	AE제, 감수제, AE감수제, 고성능 AE감수제, 고성능 감수제, 유동화제
		방수막(터널용), 기계적 철근 이음(커플러)
		줄눈재료(실리콘 실런트), 방음판(투명형)
		비탈면녹화용 종자
C군	현장 시공여건에 따라 세부제원이 결정되는 자재	보강토 옹벽 전면판 및 보강재료
		프리캐스트 콘크리트패널주1), 교량받침주2), 교량신축이음장치, 교량점검시설
		방음판(투명형 제외)
기타 자재	-	구입골재, 다웰바, 고착제, 표지판, 반사지, 현광방지시설, 시선유도시설, 가드레일, 가드휀스, 돌망태, 낙석방책, 낙석방지망, 낙석방지 울타리, 교대보호블럭, 호안블럭, 경계블럭, 보차도용 인터로킹 블럭, 도로표지 도료용 유리알, 건축공사용 자재류, 전기공사용 자재류, 설비공사용 자재류, 통신공사용 자재류, 조경공사용 자재류, 수평천연섬유 배수재, 도로종배수용 강관, 콘크리트용 표면보호재료, PVA섬유 등
		주요 가설 기자재[별표 #2] 참조

주1) 프리캐스트 콘크리트패널은 공급원 승인시 완제품 공인기관 성적서(균열, 처짐) 확인

주2) 교량받침 중 일체형 탄성받침의 경우 표준제품에 대한 공인기관 성적서로 공급원 승인 요청 가능
단, 이러한 경우 해당자재 반입 전 최초 품질관리시험을 시행하여 성능을 확인 한 후 반입하여야 함

[별표 #4]

사전 주요 품질시험 항목 (B군 자재)

구 분	사전 주요 품질시험 항목
AE제, 감수제, AE감수제, 유동화제, 고성능 AE감수제, 고성능 감수제	「콘크리트용 화학혼화제 품질기준 개선 적용」 제시 항목 (환경품질처-4727(2014.12.19))주1)
방수막(터널용), 기계적 철근이음(커플러)	우리 공사「고속도로 공사용 건설재료 품질 및 시험 기준」에서 제시하는 시험항목
포장용 줄눈재료 (실리콘 실런트)	성분분석시험 (C〈 Si 여부)
방음판(투명형)	우리 공사 투명방음판 하중 변위시험법에 의거 시행
비탈면녹화용 종자주2)	「도로비탈면 녹화공사의 설계 및 시공지침」 (국토부, 2009)에서 제시하는 시험 항목

주1) 콘크리트용 화학혼화제 품질기준 개선 적용 제시 항목(환경품질처-4727,2014.12.19)

- 슬럼프(㎜) 및 공기량(%)

- 감수율(%)

- 블리딩 양의 비(%)

- 압축강도의 비(%) : 재령 3일, 7일

- 경시 변화량 : 슬럼프(㎜), 공기량(%)

- 염화물 이온량(㎏/㎥) 및 전체 알칼리량(㎏/㎥)

- 관리시험 : 고형분의 차(%) (ASTM C494, 적외선 수분계), 비중의 차(%) (KS A 0601)

주2) 비탈면녹화용 종자의 품질관리는「비탈면녹화종자 품질관리 개선방안」을 따름

주3) 사전 주요 품질시험 항목 대한 시험결과를 최초 품질관리시험 빈도로 인정

※ 단, 시험 불합격시 품질관리시험 빈도로 불인정

[별표 #5]

품질시험 성적 적정성 확인체계

□ 건설기술용역업자(품질검사) 인증여부 확인방법

【관련 법령에 의거 등록된 기관의 경우】

① 국토교통부 홈페이지 접속(www.molit.go.kr) → 통합검색 서비스 → ‘품질검사전문기관’ 현황 검색 → 대상기관 등록 여부 확인

※ ‘품질검사전문기관’ 현황에 미등록된 기관의 경우
→ 시·도지사가 발급한 등록증 사본 확인 (*등록시기 필히 확인)

② 발행 시험성적서의 업무범위(종합, 토목, 건축, 특수) 확인

☞ 예  시

구 분	전문분야①	업무범위②	시험가능항목
○○기술(주)	토 목	골재, 레디믹스트 콘크리트	①+②
○○연구원(주)	특 수	아스팔트 콘크리트	②

【국가기술표준원 인증기관(KOLAS)의 경우】

o 기술표준원 홈페이지 접속(www.kolas.go.kr) → KOLAS검색 서비스 → 시험기관, 검사기관 검색 → 인정항목(규격명, 규격코드 확인)

☞ 예  시 : 한국도로공사 도로교통연구원

- 인정항목 : 역학시험 (KS F2402 콘크리트 슬럼프시험 외 5개 분야)

□ 품질 시험성적서 위․변조여부 확인방법

【인터넷상 시험성적서 조회가 가능한 기관의 경우】

o 해당 건설기술용역업자(품질검사) 홈페이지 접속 →
시험성적서 조회 (시험번호, 사업자등록번호, 대표자 성명 입력) →
현장 보유 시험 성적서와 대조 확인

【인터넷상 시험성적서 조회가 불가능한 기관의 경우】

o 국토교통부건설 CALS포탈시스템 접소 → 품질시험․검사성적서 열람 →
현장 보유 시험 성적서와 대조 확인

【인터넷상 시험성적서 조회가 불가능한 기관의 경우】

o 해당 시험성적서 List 첨부 후 해당기관에 공문 발송 → 시험성적서 위․변조 여부 확인

[별지 제1호 서식]

자 재 사 용 보 고

1. 공 사 명 :

2. 시공회사 :

3. 자 재 명 :

4. 규    격 :

5. 사용부위 :

6. 사용 예정 일자 :

7. 타기관ㆍ타공구 공급원 승인 현황

승인 기관명	승인관련문서번호	승인일자 (유효기간)	승인신청공구 (시공회사)	비 고

※ 붙  임 : 1. 승인문서 사본 1부

: 2. 공급원 사전 체크시트 1부

20__ .   .   .

작성자 :   ○ ○ ○ 건설공사  현장대리인  ○  ○  ○  (인)

○ ○ ○ 건 설 사 업 단 장(지역본부장)  귀 하

[별지 제2호 서식]

공급회사 변경 보고

1. 공 사 명 :

2. 시공회사 :

3. 자 재 명 :

4. 규    격 :

5. 사용부위 :

6. 공급회사 변경현황

품 명	제조회사	공급회사		비 고
		당 초	변 경

7. 변경사유 :

※ 붙  임 : 1. 승인문서 사본 1부

: 2. 변경회사(공급회사) 사업자 등록증 1부

20__ .   .   .

작성자 :   ○ ○ ○ 건설공사  현장대리인  ○  ○  ○  (인)

○ ○ ○ 건 설 사 업 단 장(지역본부장)  귀 하

[별지 제3호 서식]

공급원 사전 체크시트

□ 공 사 명 : ○○～○○간 건설(확장)공사(제00공구)

□ 자 재 명 : ○○○○○(○○○○)

구분	사전 Check 항목	선택사항(V)
공통사항	◈공급원 승인(자재사용보고)을 요청하여야 할 대상에 해당되는가? ☞공사목적물에 사용되는 자재, 가설기자재(안전인증자재, 콘크리트교량 가설용동바리, 주요 가시설용 H형강)	□	Yes	□	No
	◈공급원 승인 or 자재사용보고 ?	□	공급원	□	자재사용
	◈자재의 종류?	□	품질인증자재	□	품질인증이외의자재
		□	특별관리대상자재	□	외산자재
	◈자재 군별 분류?	□	A군	□	B군
		□	C군	□	기타
	◈자재 반입 15일 전에 해당되는가?	□	Yes	□	No
공급원	◈구비서류가 적정한가? ①품질인증자재 -최근12개월 이내의 국·공립시험기관 or 건설기술용역업자(품질검사) 시험성적서? -제조회사의 최근 3개월 이내의 자체시험성적서? -품질인증(KS ) 표시증 및 인증서 사본? -사업자 등록증? ②품질인증 이외의 자재 및 특별관리 대상자재 -최근6개월 이내의 국·공립시험기관 or 건설기술용역업자(품질검사)시험성적서? -최근12개월 이내의 국·공립시험기관 or 건설기술용역업자(품질검사)시험성적서? (시험기간이 장기간 소요 시험항목인 경우) -사업자 등록증? ③외산자재 -최근6개월 이내의 국·공립시험기관 or 건설기술용역업자(품질검사)시험성적서? -6개월 이내 자재생산국가의 공인시험기관 or 국제공인시험기관의 품질시험성적서? (외산자재 중 국내에서 시험이 불가능할 경우) -사업자 등록증(공급회사분)? ④기타 -6개월 이내의 해외 각국의 인정기구에 등록된 시험기관의 품질시험성적서? (국산자재 중 국내시험이 불가능한 경우) -감독원(건설사업관리기술자) 입회한 자체시험성적서 or 품질보증서 or 자재사용실적서등? (국내·외 공인시험기관에서 시험이 불가능할 경우)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes	□□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	No No No No No No No No No No No No
	◈구비서류가 사본일 경우는 감독원(건설사업관리기술자)이 원본대조후 현장대리인의 원본대조필 서명·날인이 되어 있는가?	□	Yes	□	No
	◈품질시험 성적 적정성 여부 확인 -국·공립 시험기관 또는 시·도지사에게 등록한자(건설기술용역업자(품질검사))? -품질검시기관의 업무범위내 시험항목? -품질시험 성적서 위․변조 여부 확인?	□ □ □	Yes Yes Yes	□ □ □	No No No
	◈시험성적서는 시료명, 시료채취장소, 성과 이용목적 등이 명확하게 표기?	□	Yes	□	No
	◈요청 공문에 자재명, 규격, 제조사, 공급사, 품질인증여부 등이 포함되어 있는가?	□	Yes	□	No
	◈감독원의 검토의견서가 포함되어 있는가?	□	Yes	□	No
	◈B군에 해당되는 경우 -사전 주요 품질시험 항목에 따라 시험하였는가? -샘플링은 감독원이 직접 하였는가? -화학혼화제 시험시 반드시 현장골재를 사용하였는가?	□ □ □	Yes Yes Yes	□ □□	No No No
	◈C군에 해당되는 경우 -시공계획 도면과 자재규격, 성능이 포함된 시공계획서를 감독원에게 제출·검토를 받았는가? -공인기관 시험을 통해 자재규격, 성능을 확인하였는가?	□ □	Yes Yes	□ □	No No
	◈외산자재에 해당하는 경우 -공급원 승인요청으로 하였는가? (자재사용보고 불가) ⓐ국내품질기준을 적용하였는가? ⓑ감독원(건설사업관리기술자) 승인하에 외산자재 생산국가 품질기준 준용하였는가?(기준전무)	□ □	Yes ⓐ	□ □	No ⓑ
	◈가설기자재를 사용하는 경우 -신규(공급원 승인), 재사용자재(건설현장 가설기자재 관리기준)	□	신규자재	□	재사용
자재사용보고	◈별지1호 서식을 이용하였는가?	□	Yes	□	No
	◈관련서류가 첨부되었는가? (별지 제1호 서식, 승인공문 사본 1부)	□	Yes	□	No
	◈감독원 검토의견서가 포함되어 있는가? (공급원 승인 후 품질기준 변경 또는 추가여부 및 품질기준 만족여부확인 포함)	□	Yes	□	No
	◈공급원 승인 자재의 유효기간내에 있는가? (공급원 승인 공구 준공여부 확인)	□	Yes	□	No
	◈혼화제(AE제, 감수제, AE감수제, 고성능AE감수제, 고성능감수제, 유동화제)의 경우 -현장골재를 이용하여 사전 품질시험을 시행하였는가? -그 결과를 자재사용보고서에 첨부하였는가? -감독원(건설사업관리기술자)은 현장 시험이 가능한 항목에 대하여 직접 입회하였는가?	□ □□	Yes Yes Yes	□ □□	No No No

[별지 제4호 서식]

감독원 검토 의견서

□ 공사명 : ○○～○○간 건설(확장)공사(제00공구)

□ 자재명 : ○○○○○(○○○○)

□ 구  분 : 공급원 승인 요청(자재사용보고)

구 분	내 용	비 고
제출서류 검토	- 자재분류별 제출서류 적정성 - 현장대리인 원본대조필 날인 여부(사본인 경우)
품질 적정성 검토	- 자재품질기준 만족여부 등
품질시험 성적 적정성 여부	- 시험기관 업무분야 적정성 - 시험성적서 위변조 여부 - 시료명, 성과이용목적 등 표기여부
검토 종합의견	- 공급원 승인 적정여부에 대한 종합의견

20__ .   .   .

검토자 : 책임감독  ○ ○ ○  (인)